투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	시설과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 알림(경희궁 자정문 및 북월랑 지붕보수공사)

1. 시설과-7406(2015. 12. 08)호와 관련입니다.

2. 「경희궁 자정문 및 북월랑 지붕보수공사」 변경계약 요청건에 대하여 검토한 바, 지방계약법 제22조 및 동법 시행령 제74조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장제6절(공사설계변경)에 해당되어 변경계약을 체결하였으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 경희궁 자정문 및 북월랑 지붕보수공사

나. 계약일자 : 2015. 12. 10.(목)

다. 변경사항

구 분	변 경 전	변 경 후	변 경 내 용
계약금액	************	************	2,089,000원 감소
과업내용	추녀처짐 보수·보강 지붕해체 복수 등	추녀 보수·보강방법 변경 지붕공사 내역 변경 등	방침서 참조

라. 변경사유

- 공사 방법, 범위의 결정 등에 대하여 문화재전문위원의 의견을 수렴하고, 그 내용을 반영하여 과업 설계내용을 변경함이 타당하다고 사료됨

붙  임 1. 합의각서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 변경계약체결통보서 1부.  끝.

	총무과장
주무관	주슬기		총무과장	12/11 연규승
협조자
시행	총무과-15109	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)