문서번호	행정지원과-26905
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
백판종	김종진	김인웅		12/11 정경효
협 조

아름답고 효율적인 청사관리를 위한 청사 복도 도색 보수공사 계획

2015년  12월

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

청사 복도 도색 보수공사 계획

얼룩지고 변색된 청사(본관, 별관) 복도를 산뜻하게 도색하여 상수도의 깨끗한 이미지 제고 및 아름다운 청사 운영 관리에 만전을 기하고자 함

1  추진배경

❍ 청사 복도 페인트 노후화(얼룩 및 변색)로 인한 미관 저해로 인하여

깨끗하고 아름답게 도색하여

❍ 내방 민원인께 아리수 수돗물 이미지 제고에 기여 및 청내 근무       직원들에는 근무의욕을 고취할 수 있도록 추진하고자 함

2  현    황

❍ 본관 복도 도색

구 분	면적(㎡)	도색방법	도색일	비 고
본관복도	633	일반수성	2008년 10월

❍ 별관 복도 도색

구 분	면적(㎡)	도색방법	도색일	비 고
별관복도	220	무늬콧트	2008년 12월

3  시공방향

❍ 깨끗한 상수도 이미지가 전달되도록 전체적으로 밝은 색상 선택 적용

❍ 친환경 재질(제품) 사용하여 시공

4  공사개요

❍ 공사명 : 청사 복도 도색 보수공사

❍ 위  치 : 청사 본관 및 별관복도

❍ 규  모 : 853㎡(본관: 633, 별관: 220)

❍ 주요공정

- 본관 복도 벽체 페인트(광택수성) 롤러칠 2회(633㎡)

- 본관 복도 걸레받이 페인트(에나멜) 붓칠 2회(100m)

- 본관 복도 바닥 보양작업(비닐설치)

- 별관 복도 벽체 페인트(광택수성) 롤러칠 2회(220㎡)

- 별관 복도 걸레받이 페인트(에나멜) 붓칠 2회(50m)
- 별관 복도 바닥 보양작업(비닐설치)

❍ 공사기간 : 2015.12.19.(토) ~ 12.20.(일)

5  예산현황

소요예산 : 7,700천원

❍ 재료비 : 3,100천원

❍ 인건비 : 3,900천원

❍ 기  타 : 700천원

계약방법 : 소액 수의계약

--❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 규정

예산과목

❍ 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

6  추진일정

❍ 내부방침 : 2015년 12월 11일

❍ 설계․발주 : 2015년 12월 11일

❍ 계    약 : 2015년 12월 14일

❍ 준    공 : 2015년 12월 20일

7  행정사항

❍ 설계전 관련업체 자문 등 사전준비 철저

❍ 공사 시행시 예산낭비 사례가 없도록 유념하여 설계 및 시공

❍ 하자 및 사고가 발생하지 않도록 감독 규칙 준수 철저