투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	계약의뢰(2015년 노후포장도로 정비구간내 노면표시 보수공사, 2구역)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 노후포장도로 정비구간내 노면표시 보수공사(2구역)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 실시하였기에 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 노후포장도로 정비구간내 노면표시 보수공사(2구역)

나. 공사기간 : 2015. 5. 21 ~ 2015. 12. 15

다. 계약금액 : 금296,948,000원

라. 도 급 자 : ㈜건인씨앤알 대표 차 창 진

마. 설계변경사유

- 노후포장도로 정비계획에 의거 포장구간에 대한 노면표시 복구를 완료하고 실시공 수량으로 정산

바. 변경                                                  (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	301,948,000	283,580,000	감 18,368,000
도급비	296,948,000	283,580,000	감 13,368,000
관급비	-	-	-
이전비	5,000,000	0	감 5,000,000

사. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발),노후포장도로정비공사, 시설비

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증결과 자료 1부.

4. 설계변경 시행 방침.

5. 합의서 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	이기영		도로보수과장	12/11 국중진
협조자
시행	도로보수과-5612	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	2210-1538	/전송	2210-1549	/		/	부분공개