문서번호	토목부-26676
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	12/11 노우성
협조
	주무관		장종환

본선고가교 설계도서 검토결과 보고

【강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12

도시기반시설본부

(토목부)

본선고가교 설계도서 검토결과 보고

【강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사】

본선고가교(P5~A2) 상·하부공에 대한 설계도서 검토결과 설계도면 보완 및 수량산출 오류 정정 등을 반영하고 보고드림

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사구간 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96㎞(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공사기간 : 2001. 7. 3.~2018. 7.31.(9차 `15. 3.10.~12.31.)

❍ 도 급 비 : 229,982백만원(9차 : 25,000백만원)

❍ 시공사/감리사 : 롯데건설㈜ 외1 / ㈜동명기술공단

2		추진경위

❍ `12.12.27 : 본선교(P1~P4) 설계도서 검토 변경 완료

❍ `14.03.14 : 본선교(P5~A2) 설계서 보완 요청(시공사→감리단)

❍ `14.03.17 : 강교 설계 보완 협조 요청(감리단→설계사)

❍ `15.05.22 : 설계도서 보완 제출(설계사→감리단)

❍ `15.08.20 : 설계도서 사전 검토결과 송부(감리단→시공사)

❍ `15.08.24 : 설계도서 검토결과 보고(시공사→감리단)

3		보고내용

❍ 본선고가교 P5~A2 상·하부공 설계도서 검토결과 설계도면과 구조계산서, 수량산출서가 상이하여 감리단의 사전 설계 검토의견에 대해 원설계자가 설계도서를 보완, 수정하고 이에 따른 철근, 거푸집 등 수량 변경됨

❍ 변경 수량 증·감 현황

구 분		설계도면 검토 보완		수량산출 오류 정정			비고
		강관파일 (본)	철근수량 (ton)	철근수량 (ton)	거푸집 (m2)	콘크리트 (m3)
상부공	BR1	-	-	0.104	-
	BR2	-	-	37.542	-
하부공	P5	8	1.225	0.684	92
	P6	-	4.956	1.466	82
	P7	-	7.638	1.763
	P8	-	1.166	1.114		3
	A2	-	0.589	-	4	3
소계		8	0.298	32.619	178	6
합계		8	32.321		178	6

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
구조물공	903,151	900,245	2,906
직접공사비	903,151	900,245	2,906
간접비	542,304	537,028	5,276
공급가액	1,445,455	1,437,273	8,182
부가세	144,545	143,727	818
총공사비	1,590,000	1,581,000	9,000

4		조치계획

❍ 본선고가교 P5~A2 구간 상·하부공 설계도서 검토결과에 대한 책임건설사업관리기술자의 보고 내용은 적정하므로 승인처리하고,차후 설계변경 시에 반영하도록 하고자 함.

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.