서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 변경계약 의뢰(계약기간 변경)

1. 계약번호 20140627438, 계약번호 20150*******01호 및 재무과-13185(2015.3.11.)호와 관련입니다.

2. 혜화·명륜동일대 지구단위계획 수립와 관련하여 아래와 같이 변경계약(기간변경)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

구 분	혜화·명륜동일대 지구단위계획수립 (성곽마을 재생계획 포함)	교통영향분석개선대책 및 전략영향평가 용역	비고
용역기간	2014.6.23.∼2015.12.22. (2차:′15.3.1∼′15.12.22)	2015.2.27.∼2015.12.23
계약금액	678,100,000원 (2차: 478,100,000원)	84,005,000원
용역사	㈜온공간연구소+낙현재건축	㈜동해종합기술공사

나. 변경내용

❍ 지구단위계획 수립용역

용역명	구분	당초	변경	비고
용역기간	총차	2014.6.23~2015.12.22	2014.6.23~2016.5.6
	2차	2015.3.1.∼2015.12.22	2015.3.1∼2016.5.6
계약금액	총차	678,100,000	변경없음
	2차	478,100,000	변경없음

❍ 교통영향분석개선대책 및 전략영향평가 용역

구분	당초	변경	비고
용역기간	2015. 2.27~2015.12.23	2015.2.27~2016.5.6
계약금액	84,005,700	변경없음

다. 예산과목 : 지속가능한역사문화도심구현, 역사도심활성화, 도심역사문화자원관리, 혜화,명륜동일대 지구단위계획 수립, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 용역 준공기한 연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 2부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	이현철		도심계획팀장	오승민		역사도심재생과장	12/11 양병현
협조자
시행	역사도심재생과-13692	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 역사도심재생과	/
전화	2133-8496	/전송	2133-0742	/	hyen1234@seoul.go.kr	/	대시민공개