문서번호	총무과-40861
결재일자	2015.12.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		최석기	12/11 이혜경
협 조

「2015년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가)」 설계변경(준공정산)검토보고

2015. 12.

2015년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(준공정산)검토보고

2015년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 시행중 발생한 물량증감, 신규비목 추가에 대한 설계변경 및 준공처리를 위한 제경비(보험료 등) 정산을 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명  :  2015년도 시청사 건축시설물 유지보수공사(연간단가계약)

○ 공사기간  :  2015. 02. 25 ~ 2015. 12. 28

○ 계약금액  :  금216,756,360원

○ 계약업체  :  한국건설기술교육원 대표 박상현

○ 계약내용  :  건축시설물 유지보수공사 1식

□ 설계변경 및 정산 검토내용

○ 대  상

- 설계변경으로 인한 계약 내용변경(물량증감, 신규비목 등)

- 준공처리전 제경비 정산 처리(보험료 및 환경보전비 등 각종 수수료)

○ 규  정 : 행정안전부 예규 제404호(’12.3.22)

- 물량증감 : 증감된 공사량의 단가는 계약단가 적용

- 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을

곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

※ 지방자치단체 공사계약일반조건 제7절 : 계약금액의 조정

□ 변경내용

○ 변경금액 : 감 25,772,360원

구 분	금 액 (원)			비고
	계 약	변 경	증 감 액
총 공 사 비	***********	***********	************

○ 세부공사내용

연번		공 사 내 용	공사금액 (천원)
설계 변경	1	송월동 청사 등 별관 환경개선 공사	******
	2	청계임차 청사 이전 및 서소문청사 환경개선 공사	******
	3	서소문청사 직원식당 보수 공사	******
	4	남산별관 보수 공사	******
	5	남산제1별관 텍스 설치 공사	******
	6	서울시 차량 차고지 옥상방수 공사	******
	합 계		*******

○ 검토결과

- 물량증감 : 계약단가 적용

- 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액 적용

- 제 경 비

· 보험료 및 환경보전비 등 각종 수수료 정산처리

*************************************************

□ 향후일정

○ `15. 12. 11 변경 계약 체결

○ `15. 12. 16 공사 준공(3차 기성 준공 금액)

변경금액	전회까지 기성금액	최종(3차)기성금액	비고
190,984,000	***********	**********

따로붙임  1. 시공사 제출 공문 및 합의서 1부

2. 변경설계서 1부.

3. 기성내역서 1부.  끝.