투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(레미콘) 납품기한 연장 요청 (재사용플라자 건립공사)

1.「재사용플라자 건립공사」관급자재(레미콘) 납품기한을 아래와 같은 사유로 연장코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 물 품 명 : 레미콘

나. 계 약 자 : 서울경인레미콘공업(협)

다. 납품기한 변경사항

납품요구번호	규 격	수 량(㎥)	납품기한		비고
			변경전	변경후
12-15-1-15930-00	레미콘 25-18-120	210.2	‘15. 12. 31.	‘16. 3. 31.

라. 사   유 : 폐기물 처리로 인한 공정 지연에 따른 공정조정으로 계획물량 미소진되어 연장 필요

마. 귀책사유 : 도시기반시설본부(지체상금 미부과).    끝.

	건축부장
주무관	김민호		환경시설과장	신명승		건축부장	12/11 안재혁
협조자	주무관	김찬유
시행	건축부-14216	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2646	/전송	02-3708-2659	/	protossx@seoul.go.kr	/	대시민공개