문서번호	설비부-15993
결재일자	2015.12.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김영수	12/11 박기형
협조

『신사사거리~고양시계간 도로개설 공사』

준공기한 연기 검토 보고

2015.  12.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『신사사거리~고양시계간 도로개설 공사』

준공기한 연기 검토 보고

「신사사거리~고양시계간 도로개설 공사」관련, 책임감리원으로 부터 전기·통신공사(관급포함) 준공(납품)기한 연기요청에 대한 검토 보고임.

사업개요

□ 전기공사

- 규     모 : 터널등 535개, 가로등주 39본, 보행자등 39개 등

- 공사기간 : 2014.08.21.~ 2015.12.30

- 도 급 비 : 총차-780,019,650원(2차-630,019,650원)

- 시 공 사 : 우림종합전기(주)

□ 통신공사

- 규     모 : CCTV설비 14대, 지하재방송설비 1식, 인입설비 1식 등

- 공사기간 : 2014.08.29.~ 2015.12.30

- 도 급 비 : 총차-324,983,000원(2차-304,983,000원)

- 시 공 사 : (주)화인전설

□ 감 리 단 : ㈜신명건설기술공사 외 2개사

실정보고 내용

□ 준공기간 변경내용

구 분	계약자	공사기간		계약금액 (변경없음)	비 고
		당 초	변 경
전기공사	우림종합전기(주)	2014.08.21 ~ 2015.12.30	2014.08.21 ~ 2016.02.26	780백만원	증58일
통신공사	(주)화인전설	2014.08.29 ~ 2016.12.30	2014.08.29 ~ 2016.02.26	325백만원	증58일

□ 관급자재 납품기한 변경내용

품 명	계약자	납품기한		계약금액 (변경없음)	비고
		당 초	변 경
가로등분전반	(주)두리계전	2015.12.30	2016.02.26	6,996,000
가로등 점멸기	웰스씨앤티(주)	2015.12.30	2016.02.26	1,690,000
가로등주	㈜명도	2015.12.30	2016.02.26	30,560,000
도로조명설비	㈜코리아반도체	2015.12.30	2016.02.26	27,680,000
수배전반	대신파워텍(주)	2015.12.30	2016.02.26	70,000,000
영상감시장치	이노뎁(주)	2015.12.30	2016.02.26	94,479,200
UPS	성신전기공업(주)	2015.12.13	2016.02.26	19,300,000

□ 연기사유

- 선행공사(토목) 연기에 따른 후속 공종인 전기공사 연기

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

조치의견

□ 토목공사의 토공, 경계석 및 경찰청 교통규제심사 등의 공정이 완료된 후 작업이 착수되는 후속 공정으로써 토목공사의 공기가 연기됨에 따라 전기·통신공사 기간이 부족하여 준공기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

□ 서울시 재무과 및 건설총괄부에 준공(납품)기한 연기 의뢰 하고자 함.

붙임 : 1. 감리검토 보고서 1부.

2. 합의서 각1부.  끝.