투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	신월야구공원 인조잔디 구매·설치공사 실정보고

1. 신월야구공원 인조잔디 구매․설치공사 추진과 관련하여 12월 10일(목)에 비가 내리는 기상여건으로 인해 설치된 인조잔디가 물기에 젖어 다음 공정인 규사 및 충진재가 인조잔디에 안정화가 되지 못하여 불가피하게 공사가 지연되고 있습니다.

2. 부실공사, 하자 등을 예방하기 위해서는 기상이 호전되어 인조잔디가 건조되는 절대적인 시간이 필요함을 보고드리고, 추후 지연된 공정을 만회하기 위해 최선을 다해 추진할 계획이며, 지연된 공정 만회 대책으로 야간작업(조명타워 사용)을 추진하여 날씨로 인한 지연 공사 부분을 신속히 완료코자 합니다.

○ 야간작업 계획(조명타워 사용)

구 분	일 정	사용시간	비 고
신월야구공원 조명타워	12.11.~12.13.	17:00~20:00	규사 및 충진재 포설 등

3. 앞으로도 기상여건 변화에 따라 공사 추진일정이 불가피하게 조정․변경될 수도 있음을 감안해야 한다는 점을 보고드립니다.

덧붙임 : 공사 현황사진 1부. 끝.

주무관	김현오		주무관	이경재		목동사업과장	12/11 신종권
협조자	신월야구공원관리팀장	이제동
시행	목동사업과-13407	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2640-3839	/전송	02-2640-3889	/	kimo1910@seoul.go.kr	/	대시민공개