문서번호	교통운영과-24272
결재일자	2015.12.12.
공개여부	부분공개
방침번호

						시 민
주무관	신호시설팀장		교통운영과장		보행친화기획관
김영수	김균호		강진동		12/12 김용남
협 조
	교통안전팀장					김세교
	주무관					박종현
	주무관					김수정
	주무관					백성현

「교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역」

설계변경 시행계획 보고

2015.12.

교통운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역」

설계변경 시행계획 보고

소방차 전용 신호시스템의 원활한 구축을 위해 교통안전시설 실시설계를 기 시행중인 ‘교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역’ 과업에 포함 시행하고, 설계변경 및 정산처리 하고자 보고 드림

□ 용역 개요

○ 건명 : 교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역

○ 권역별 계약현황                               [단위 : 천원]

용 역 명	설계업체 계약자(대표)	계약금액	계약기간	비 고
교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역(강남권역)	㈜트래픽스 대표 김희수	86,483	‘15.03.12. ~‘15.12.31.
교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역(강북권역)	㈜동림티엔에스 대표 이탁수	86,799	‘15.03.19. ~‘15.12.31.

※ 과업내용 : 교통신호기 신설・보수공사를 위한 설계도서 작성

□ 소방차 전용 신호시스템 설계현황            [단위 : 천원]

설계업체	사업소	건수	119안전센터	설계원가	부가세	설계비
㈜ 트래픽스	동부	1	잠실119	2,460	246	2,706
	남부	1	봉천119	2,840	284	3,124
	강서	2	수궁119, 목동119	3,640	364	4,004
소 계		4		8,940	894	9,834
㈜ 동림티엔에스	성동	1	청량리119	2,880	288	3,168
	북부	2	공릉119, 방학119	4,370	437	4,807
	서부	3	수색119, 무학119, 연희119	5,520	552	6,072
소 계		6		12,770	1,277	14,047
합 계		10				23,881

※ 2015년 소방차 전용 신호시스템 구축 : 10개소(강남 4, 강북 6)

□ 변경사유

○ 교통사망사고 줄이기사업으로 진행하는 소방차 전용 신호시스템 10개소 구축사업의 설계업무 추가에 따른 물량증가로 원활한 사업시행을 위해 기 계약된 ‘교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역’ 과업에 포함하여 실시설계 시행.

□ 설계변경 내역

○ 권역별 변경현황                               [단위 : 천원]

용 역 명	계약금액 변경 내역				설계업체
	변경 전	변경 후	증감액
교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역(강남권역)	86,483	96,317	증	9,834	㈜ 트래픽스
교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역(강북권역)	86,799	100,846	증	14,047	㈜ 동림티엔에스
합 계	173,282	197,163	증	23,881

※ 증액분은 ‘교통사망사고 줄이기사업’ 예산으로 조치

□ 예산과목

○ 교통신호기 신설 및 보수

- 단위)교통안전시설물관리, 세부)교통신호기 신설 및 보수

목)시설비 및 부대비, 통계목)시설비

○ 교통사망사고 줄이기사업

- 단위)교통소통 및 안전관리 강화, 세부)교통사망사고 줄이기 사업

목)시설비, 통계목)시설비(401-01) 응급차량 접근로 개설

□ 추진계획

○ 2015. 12 : 설계변경 및 정산시행

붙임 : 1) 계약내역서(강남권역) 변경설계서 1부.

2) 계약내역서(강북권역) 변경설계서 1부.

3) 소방관서 긴급출동신호시스템 설계도면 각 1부.  끝.