투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	천호대로(광나루역) 확장공사 예산배정요청(감리비)

우리본부에서 시행중에 있는 『천호대로(광나루역) 확장공사 전면책임감리용역』과 관련하여 공사비 부족으로 시설공사의 준공기간을 연장하고 전면책임감리용역도 용역기간을 연장하여 설계변경을 시행하고 아래와 같이 감리비를 배정요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 전면책임감리용역

2. 용역기간 변경 현황

가. 전체 계약 :‘10.11. 1. ~ ’15.12.31. → ’10.11.1.~‘18. 1.31.

나. 5차 계약  :‘15. 4. 1. ~ ’15.12.31. → ‘15. 4. 1.~ ’16.12.31.

3. 예산 배정요구

【금액단위 : 천원】

구 분	예산현액	기배정액	금회 요구액	총 배정액	잔액	비 고
감리비	1,291,000	500,000	768,900	1,268,900	22,100

붙임 : 방침서 2부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이상근		교량건설과장	이동훈		토목부장	12/13 노우성
협조자
시행	토목부-26695	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2579	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개