투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(3회, 정산)

우리 사업소에서 시행중인 「2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부」에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부

나. 공사개요 : 소규모 포장복구 88a, 절삭 덧씌우기 319a 등

다. 계 약 일 : 2015. 04. 01.

라. 공사기간 : 2015. 04. 03. ~ 2015. 12. 31.

마. 도 급 비 : 도급비 1,366,970,000원

바. 도 급 자 : 에이치에프건설(주) 대표 황 행 묵

사. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,700,000,000	1,697,316,970	감 2,683,030
도급비	공급가액	1,242,700,000	1,208,500,000	감 34,200,000
	부 가 세	124,270,000	120,850,000	감 3,420,000
	계	1,366,970,000	1,329,350,000	감 37,620,000
관 급 비		333,030,000	367,966,970	증 34,936,970

아. 설계변경 사유 : 공종별 정비물량 조정 등 ※ 별첨 설계변경사유서

자. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 계약금액조정 검증 1부.

3. 변경설계서 및 합의각서 1부. 끝.

주무관	최병수		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	12/14 노영석
협조자	주무관	최완		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-12298	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	cbs0656@seoul.go.kr	/	대시민공개