문서번호	토목부-26782
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	12/14 노우성
협조
	주무관		강철규

노면표시 변경 및 도로규제봉 설치 등

(서울역 주변 교차로 개선공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

노면표시 변경 및 도로규제봉 설치 등

(서울역 주변 교차로 개선공사)

서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따라 노면표시 변경 및 도로규제봉 설치를 위한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 유호(서울역)제15-27호(2015.12.10.)실정보고(교통안전시설공 변경요청)

○ 서울특별시지방경찰청 교통관리과-32957호(2015.11.30.)

2015년 제11차 교통안전시설 심의결과 통보

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 서울역 주변 5개소 교차로

○ 규    모 : 교차로 개선 4개소, 삼거리 신설 1개소

- 서울역교차로, 중림동교차로, 염천교교차로, 숙대입구교차로, 숭례문삼거리(신설)

○ 공사기간 : 2015. 8. 7.∼ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 1,385백만원

○ 시 공 사 : 유호산업개발㈜

Ⅲ		보고내용

□ 노면표시 변경 등

➀ 보고사유

- 서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따라 노면표시 변경 및 도로규제봉을 설치하고자 함

▷ 중림동 교차로 노면표시

·당초 (1,210m) →  변경 (2,071m)

▷ 숙대입구 교차로 노면표시

·당초 (1,124m, 도로표지병 42개)  →  변경 (1,592m, 도로표지병 62개)

▷ 서울역 교차로 노면표시

·당초 (23,025m) → 변경 (43,529m, 도로규제봉 322개)

- 서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과 숭례문삼거리 신설은 상정철회되어 수량정산 처리하고자 함.

➁ 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
중림동 교차로
차선도색(융착형)	15㎝	m	1,210	2,071	861
차선제거	15㎝	m	754	670	84
2. 숙대입구 교차로
차선도색(융착형)	15㎝	m	1,124	1,592	468
차선제거	15㎝	m	48	198	150
도로표지병 설치	130*110*30	개	42	62	20
2. 서울역 교차로
차선도색(융착형)	15㎝	m	23,025	43,529	20,504
차선제거	15㎝	m	5,862	9,203	3,341
도로규제봉 설치	80*760	개소	-	322	322
2. 숭례문 삼거리
차선도색(융착형)	15㎝	m	3,788	-	3,788
차선제거	15㎝	m	2,316	-	2,316
도로표지병 설치		개	166	-	166
교통안전표지판		SET	19	-	19

➂ 공사비 증·감 현황                             (단위 : 원)

구 분	금 액		증·감	비고
	당 초	변 경
직접공사비	88,443,921	121,484,412	33,040,491
간접공사비	36,166,079	47,975,588	11,809,509
공급가액	124,610,000	169,460,000	44,850,000
부가가치세	12,461,000	16,946,000	4,485,000
도급비	137,071,000	186,406,000	49,335,000

- 단가적용 : 기계약단가 및 낙찰율 86.89% 적용

Ⅳ		조치계획

○ 서울특별시지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따른 노면표시 변경 등은 적정한 것으로 판단되어 우선 변경·설치하였으므로 추후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

붙  임 : 시공사 실정보고 1부.  끝.