투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(최종)시행-2015년CCTV 유지보수공사(연간단가)

1.  시설과-9282(2015.12.11)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2015년 CCT 유지보수공사(연간단가)』  설계변경(최종)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 CCTV 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 3. 31 ~ 2015. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜ 효성정보통신 대표 김도건

라. 설계변경(정산) 내역

(단위:원)

구 분		변경전	변경후	증 감	비고
도급비	공사원가	24,120,146	23,460,382	감)659,764
	부가가치세	2,412,014	2,346,038	감)65,976
	계	26,532,160	25,806,420	감)725,740

마. 예산과목

- 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및 산하공원 보수정비, 시설비

붙 임 1. 2차설계변경내역서 1부.

2. 설계변경(최종) 검토보고 1부. 끝.

주무관	오영근		기전팀장	강민수		시설과장	12/14 김한준
협조자	재무팀장	한선
시행	시설과-9296	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	3783-5972	/전송	3783-5969	/	fiftykun@seoul.go.kr	/	대시민공개