투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산)시행(철산교보수공사)

1. 서울시시설관리공단 공사감독1처-11552(2015.12.08)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 “철산교보수공사”의 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행하고자 합니다

가. 공 사 명 : 철산교보수공사

나. 공사기간 : 2015.06.18. ~ 2015.12.14.

다. 도 급 자 : ㈜제이에스건설안전 대표 이성우

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감
총공사비		546,696,300	567,812,170	증 21,115,870
도급비	공급가액	419,253,909	415,860,000	감 3,213,909
	부가가치세	41,925,391	41,586,000	감 321,391
	합계	461,179,300	457,446,000	감 3,733,300
관급자재비		85,517,000	110,366,170	증 24,849,170

마. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 철산교보수공사, 시설비및부대비,

시설비

붙 임 : 1) 설계변경사유서 1부.

2) 설계변경보고서 1부.

3) 제비율검증표 및 합의각서 각1부.

4) 설계변경내역서 및 관련서류 각1부.  끝.

주무관	정규용		시설보수과장	이용재		남부도로사업소장	12/14 민승기
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-4840	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	부분공개