문서번호	한양도성도감-5398
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장	문화기획관
박민상	박승길	심말숙	12/14 양현미
협 조

‘16년 서울 한양도성 주변

수목 및 담쟁이 정비 계획

2015. 12

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

‘16년 서울 한양도성 주변

수목 및 담쟁이 정비 계획

한양도성의 세계유산 등재를 위한 유네스코 현장 실사(‘16년 하반기)에 대비하고 성곽 “위해 수목 및 담쟁이” 등을 정비하여 주변 자연경관을 아름답게 가꾸고자 함

Ⅰ		추진배경

한양도성 보존․관리․활용 종합계획(‘12.6.5. 시장방침 제193호)

- 시민 안전 및 유산(도성) 보호에 저촉되는 위험수목 및 기생식물(담쟁이) 등 매년 정비

※ ‘15년도 실적 : 인왕 구간 외 3개 구간 성곽 접촉 수목 및 담쟁이 등 정비 7,000m

한양도성 전 구간(12km) 대부분에  외래식물 및 담쟁이 등이 매년 새롭게 발생하므로 지속적으로 정비 필요

※ 성돌 오염 및 주변의 자연 생태환경의 보호 차원에서 식생의 영구 제거를 위한 각종 독성 약품 등은 미사용 → “연차적 시행”

- 정비 현황사진

남산 구간 담쟁이 등 덩굴식물 정비		인왕 구간 성곽 접촉 및 위험 수목 정비
정 비 전	정 비 후	정 비 전	정 비 후

Ⅱ		’16년도 사업계획

대 상 지 : 인왕 구간 외 3개 구간 7km

연번	추진부서	구 간 명	위 치	규모 (㎞)	예산 배정액 (백만원)
계			4개소	7km	500
1	종로구	인왕 구간	월암공원~와룡공원	2.5km	250
2	성북구	백악․낙산 구간	와룡 정상~낙산공원	3.5km	100
3	중부공원 녹지사업소	남산․낙산 구간	남소문터~YTN 주변	1.0km	150

※ ‘16년 실시설계 용역 및 전문가 자문에 따라 세부 정비 위치 및 물량 조정

사업기간 : 2016년 2월 ~ 9월

사업예산 : 500백만원(서울 한양도성 수목 및 담쟁이 정비) / 국․시비

시행방법

- 본 방침에 의거 자치구(종로, 성북) 및 중부공원녹지사업소에 예산 재배정

- “한양도성 수목 GIS 체계 구축 및 보존관리계획” 용역 시행 결과에 따라 도성 주변 상징수 및 보호수 등 가치가 있는 수목 등은 보전토록 실시설계 용역에 반영

- ‘16년 한양도성 유네스코 현장 실사 전(9월), 공사 완료토록 시행부서 독려

Ⅲ		추진일정

‘16년 2월        : 예산 재배정 (종로구 / 성북구 / 중부공원녹지사업소)

‘16년 3월 ~ 6월 : 실시설계 용역 및 전문가 자문

‘16년 6월 ~ 9월 : 공사 시행 및 사업 완료

붙임  : 서울 한양도성 주변 수목 보존․관리 지침 1부. 끝