문서번호	정수시설과-3953
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		안길찬	12/14 박기석
협조

2015년 강북정수센터 취,정수장

조경관리용역 감독수행 보고

2015.  12.

강북아리수정수센터

정수시설과

2015년 강북정수센터 취,정수장

조경관리용역 감독수행 보고

우리정수센터 취․정수장 풀깎기, 전정 등 조경관리용역 감독수행 중 현장여건을 감안한 시행으로 물량과 제경비의 변동사항이 발생하여 아래와 같이 보고하고 정산설계에 반영코자함.

☐ 용역현황

◦ 용역명 : 2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리 용역

◦ 용역개요

▸ 잔디깎기   129,834㎡       ▸ 풀 깍기  424,257㎡

▸ 풀 뽑기     43,798㎡       ▸ 잔재처리     200회

▸ 교목전정      560주       ▸ 관목전정   3,500㎡

◦ 용역기간 : 2015. 04. 15 ~ 12. 22

◦ 계약금액 : 147,530,400원

◦ 도 급 자 : (주)향림  대표 정연순

☐ 보고내용

◦ 풀깍기, 풀뽑기 등 물량 변동

- 일용인부를 활용한 잔디깍기 수행으로 물량감소

- 풀의 성장을 감안하여 깍기와 뽐기 횟수를 조정하여 물량감소

- 작업지시 할 때 현장여건을 반영하여 시행함으로서 물량감소

◦ 울타리 주변 수목 제거

- 정수장 장래예정 부지의 울타리주변에 뽕나무 등 수목이 무성하게 자라 시설관리와 환경정비를 위하여 제거함으로서 물량 증가

- 울타리주변에 칡 넝쿨 급성장 등 작업 중 필요사항을 구두로 추가 작업 지시하여 시행사항을 반영

- 취수장 울타리 밖 경사지에 아카시아 나무 등이 울타리를 훼손하고 시야를 가리는 등 열악한 환경개선을 원수관리과 요청으로 정비하여 물량증가

- 교목을 일부 일용인부가 전정하였고, 대체적으로 안정되어 전정 물량감소

◦ 풀 잔제 등 처리 물량 감소

- 풀깍기 할 때 잔재 발생량에 따라 실제 운반량을 적용

- 취수장 배수로 주변의 낙엽이 많아 침수 위험과 환경이 열악하여 원수관리과 요청으로 정비함으로서 물량추가

◦ 국민 및 연금 보험료 미납부

- 계약업체에서 국민, 연금 및 노인요양보험료 납부자료 미제출

- 납부근거 미제출에 따라 보험료를 감액 정산처리

☐ 향후 추진계획

◦ 당초 설계에서 위 보고 변경사항을 반영하여도 당초 계약금액내에서 설계변경 가능

◦ 실제 작업완료 물량을 반영하여 정산시행     끝.