서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)
제목	빗물펌프장 공사현장 외부전문가 점검결과 통보

1. 하천관리과-4561(2015.11.25.)호와 관련입니다.

2. 수서역 이용시민 및 지역주민의 생활안전을 위하여 강우시 유역의 침수를 방지하고자 KTX역 부지내 건설중인 수서 빗물펌프장 공사현장의 추진현황에 대한 외부전문가를 초빙하여 점검한 결과를 알려드리니,

3. 2016년 수방에 차질이 없도록 추진하여 주시고 빗물펌프장 공사추진일정에 대한 세부공정을 서울시 하천관리과로 제출하여 주시기 바랍니다

가. 점검결과

○ 2016 수방기간(16.5.15)전 정상적인 가동을 위한 각 분야(토묵,건축,

기계,전기)의 공정과 연계된 세부추진계획과 유경험자에 의한 중점

관리가 필요

○ 기전설비, 펌프설비의 설치, 시운전등에 대한 구체적 추진방안 필요

○ 물리적 공사완료 일정이 곤란할 경우 임시펌프설치등 보완대책 필요

나. 제출기한 : 2015. 12. 22(화). 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최년수		치수설비팀장	구자훈		하천관리과장	12/14 이진용
협조자
시행	하천관리과-5654	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)서소문별관 1동8층	/
전화	02-2133-3880	/전송	02-2133-1044	/	topnbr123@seoul.co.kr	/	대시민공개