문서번호	기전과-15930
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	기전과장
하호영	한영호	12/14 박재경
협 조
	주무관		최승호

『겨울철대비 터널 및 지하차도』

부점등 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

강서도로사업소

기전과

겨울철대비 터널 및 지하차도 부점등 교체계획

겨울철을 맞아 관내 터널 및 지하차도의 조명등에 대한 부점등을 파악⦁교체하여 조명율 향상과 시민들의 안전사고 예방 및 시민 교통안전 도모에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 기전과-13641(2015.10.29.)호 : 겨울철 대비 도로기전시설물

안전점검 및 조치계획보고

시설물 현황

❍ 터    널 : 5개소(화곡, 궁동, 작동, 항동생태, 범박)

❍ 지하차도 : 16개소(외발산, 공항, 개화, 등촌, 오목, 오금, 고척2, 구로, 구로역,

가마산, 신도림, 국회앞, 서부트럭터미널,,목동교서측,

오목교서측, 서울교접속교)

❍ 조명등 현황

총 계	터 널			지하차도			비 고
	소 계	차도등	보행등	소 계	차도등	보행등
6,704	2,049	1,709	340	4,655	4,300	355

추진계획

❍ 교체일정 : 2015. 12. 21(월) ~ 12. 24(목)

❍ 교체대상 : 부점등 총 227등 ( 지하차도 227등)

※ 붙임자료 ( 터널•지하차도 부점등 현황) 참조

❍ 추진방법 : 자체인력(가로등 4명, 지하차도 10명) 활용 부점등 교체

❍ 투입장비 : 가로등 보수차량 1대, 교통안내 차량(싸인보드) 1대

❍ 작업공정 : 차도 1차선 통제 후 부점등 교체작업 실시하고, 완료 후

다음 차선 통제 후 교체작업 진행

세부추진일정

❍ 터널•지하차도별 작업일정

구 분	부점등수	교체작업 일 시	비 고
외발산지하차도	36	2015.12.21(월) 13~17시	부분통제 작 업
서부트럭터미널앞지하차도	75	2015.12.22(화) 13~17시	“
오목,등촌지하차도	74	2015.12.23(수) 13~17시	“
가마산,구로지하차도	42	2015.12.24(목) 13~17시	“

행정사항

❍ 교통통제 및 안내방송을 위한 협조공문 발송(관할 경찰서, 교통방송)

❍ 안전사고에 대비한 유관기관 연락체계 유지

향후계획

❍ 안정기 등 교체폐품 수거 후 일괄 불용처리

❍ 램프, 안정기 등 보수용 예비자재 확보(구매)

❍ 주기적인 점검을 통한 부점등 현황 파악 및 교체 실시.

끝.