문서번호	토목부-26812
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	12/14 노우성
협조

강교 방사선투과 검사방법 등 변경

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

강교 방사선투과 검사방법 등 변경

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

현장설비 및 여건상 시행이 불가능한 램프교량 강교 방사선투과 검사 방법 및 수량 증·감 변경 보고임

1		관련근거

❍ 국토교통부고시 제2015-371호(2015. 6.) : 도로교표준시방서 부분개정

❍ 동일(겸재)감 제15-303호(2015. 12. 11.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 ~ 중랑구 면목동 동일로 사거리

❍ 규    모

- 본교량 : B=18.24m, L=235m(Extra Dosed교)

- 접속교량 : B=9m, L=160m, 접속램프 2개소

- 도로확장 : B=20m → 30m, L=750m

❍ 공사기간 : 총괄 2008.10.23. ∼ 2015.12.31.

(7차 2015. 3.16. ~ 2015.12.31.)

❍ 도 급 비 : 총괄 29,997백만원(7차 3,064백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜동일기술공사외 1  ❍ 시 공 사 : ㈜한진중공업외 1

3		감리단 보고내용

❍ 현 황 및 문제점

- 당초 설계에 강교 비파괴검사 시험중 방사선투과 검사(RT)로 돼 있음

- 원자력안전법 및 「도로교표준시방서」개정으로 방사선작업종사자가 과도한 방사선에 노출되지 않도록 방사선방호를 위한 차폐시설 또는 차폐물의 현장설비가 필요하나 현재 강교제작장은 이러한 설비를 갖추고 있진 않음

❍ 검토내용

1) 방사선투과 시험 변경

- 원자력안전법 및 「도로교표준시방서」개정으로 방사선작업종사자가 과도한 방사선에 노출되지 않도록 당초 설계에 반영되어 있는 방사선투과 검사(RT) 방법과 동등한 수준의 위상배열 초음파탐상검사로 변경하여 작업자들의 안전한 작업 환경 제공

2) 수량 증·감 현황

공 종	위 치	규 격	단위	당초 수량	변경 수량	증감	비 고
방사선탐사 (RT)	Ramp-A	인장부	매	28	-	-28	PAUT로 변경
	Ramp-B	인장부	매	16	-	-16
	합 계		매	44	-	-44
위상배열 초음파 탐상검사 (PAUT)	Ramp-A	인장부	m	-	8	8	RT검사 대체
	Ramp-B	인장부	m	-	5	5
	합 계		m	-	13	13
자분 탐상검사 (MT)	Ramp-A	Girder (UF/WP/LF)	m	143	101	-42
		수평보강재	m	69	71	2
		계	m	212	172	-40
	Ramp-B	Girder (UF/WP/LF)	m	126	83	-43
		수평보강재	m	60	60	-
		계	m	186	143	-43
	합 계		m	398	315	-83
초음파 탐상검사 (UT)	Ramp-A	압축부	m	5	2	-3
		수직보강재	m	5	13	8
		Cross Beam	m	-	5	5
		계	m	10	20	10
	Ramp-B	압축부	m	3	1	-1
		수직보강재	m	8	16	8
		Cross Beam	m	-	23	23
		계	m	11	40	30
	합 계		m	21	60	40

3) 적용단가 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가

· 기존비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)   ①항 1호에 의거 계약단가 적용

· 신규비목 : 낙찰율 적용(85.337%)

- 공사비 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초		변 경		증·감
			수 량	금액(천원)	수 량	금액(천원)	수 량	금액(천원)
3. 구조물공		식		8,882		8,999		117
3.06 RAMP-A		식		4,809		4,741		-68
..6.20 비파괴검사				4,809		4,741		-68
...a 방사선검사		매	28	649	-	-	-28	-649
...a-1 위상배열 초음파 탐상검사(PAUT)		m	-	-	8	1,090	8	1,090
...b 자분탐상검사		m	212	3,929	172	3,188	-40	-741
...c 초음파탐상검사		m	10	232	20	463	10	232
							0	0
3.07 RAMP-B		식		4,073		4,258		185
..7.20 비파괴검사		식		4,073		4,258		185
...a 방사선검사		매	16	371	-	-	-16	-371
...a-1 위상배열 초음파 탐상검사(PAUT)		m	-	-	5	681	5	681
...b 자분탐상검사		m	186	3,447	143	2,650	-43	-797
...c 초음파탐상검사		m	11	255	40	927	29	672
직접공사비		식		8,882		8,999		117
제경비		식		845		910		65
공급가액		식		9,727		9,909		182
부가세		식		973		991		18
도급금액		식		10,700		10,900		200

4		검토 및 조치계획

❍ 현장설비 및 여건상 시행이 불가능한 강교 방사선투과 시험 변경과 수량 증·감에 대한 감리단의 검토내용이 적정함으로 승인토록 하고

❍ 위 사항에 대하여 향후 설계변경시 반영조치 하고자 함.

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.