투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(2015년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역)

1. 시설과-9337(2015.12.14.)호와 관련입니다.

2.『2015년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역』과 관련하여 다음과 같이 준공기한을 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2015년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역

나. 계약일자 : 2015.07.14.

다. 준공기한 : 2015.12.15.

라. 도 급 비 : 금87,572,000원

마. 도 급 자 : 우성개발 대표:윤훈식

㈜도성환경개발 대표:윤훈철

바. 준공기한연기

용 역 명	계 약 일	준 공 기 한		비 고
		당 초	변 경
2015년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역	2015.07.14	2015.12.15.	2015.12.24.

붙 임 1. 준공기한연기보고 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	전지연		시설팀장	한종수		시설과장	12/14 김한준
협조자
시행	시설과-9341	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개