함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행-3차(2013년 석관동 등 10개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2013년 석관동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3차)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 석관동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : (주)장수티엔시 대표 박창군

다. 공사기간 : 2014.01.01~2014.06.30(총공사부기기간:2013.07.09~2014.06.30)                라. 설계변경내용 : 물량 증․감 및 신공종 발생

마. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,급수공사비,개조공사비

자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비

바. 설계변경 내역                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
도급비(VAT 포함)	600,367,900	600,367,900	-

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 결과보고 1부.  끝.

주무관	조규환		주무관	이태원		시설관리과장	나태산		중부수도사업소장	01/17 안운길
협조자	주무관	현경선
시행	시설관리과-1538	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1	/
전화	3146-2215	/전송	3146-2239	/		/	대시민공개