현장실정보고(광진구 상수도공사)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	代양윤선	12/14 최명익
협 조	주무관		권영안
	주무관		박상열

문서번호 :	급수운영과-33500

광진구 상수도공사 업무 수행 중 기 작업지시 급수공사와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 14.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 작업지시 시공업체 변경보고

□ 공사현황(최초계약)

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

○ 계 약 금 : ************

○ 계 약 일 : 2015.07.06.

○ 착 공 일 : 2015.07.06.

○ 준공기한 : 2016.06.30.

○ 계 약 자 : *********

□ 공사현황(추가계약)

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(2차)(장기계속단가계약)

○ 계 약 금 : ************

○ 계 약 일 : 2015.12.07.

○ 착 공 일 : 2015.12.07.

○ 준공기한 : 2016.06.30.

○ 계 약 자 : **************

□ 실정보고

○ 현황 및 문제점

- 최초 계약된 2015년 광진구 상수도공사 계약금액이 모두 소진된 상태임.

- 이후 추가발주하여 2015년 광진구 상수도공사(2차)를 계약한 상태임.

- 최초 계약자 ㈜추진기술에 기 작업지시되어 완료된 급수공사와 진행중인 급수공사건으로 향후   정산시행 시 계약금액의 10%이상 초과할 것으로 판단됨.

(※계약금 10%이상 증액 시 재발주 대상임.)

□ 실정보고 검토

○ ㈜추진기술에 기 작업지시된 급수공사를 모두 정산시행 시 계약금액의 10%를 초과하여 재발주가어려운 실정임.

○ ㈜추진기술에 기 작업지시된 급수공사건에 대하여 완료된 급수공사와 착공된 급수공사는 모두 정산시행하고자 함.

○ ㈜추진기술에 기 작업지시된 급수공사 중 미착공되어 진행중인 급수공사는 추가계약된 2015년 광진구 상수도공사(2차) 계약업체인 ㈜한국아스텐종합개발에 변경 작업지시코자 함.

○ 변경 작업지시 현황

- 신설 : 44건(신설196번 구의동253-3호 외 43개소)

- 개량 : 11건(개량41번 중곡동50-30호 외 10개소)

□ 조치계획

○ 검토결과를 계약 상대자에게 통보하여 광진구 상수도공사 업무관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 작업지시 변경내역 1부.

2. 계약상대자 확인서 1부.  끝.