문서번호	버스정책과-21759
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정류소관리팀장	버스정책과장
이오수		정순종	12/14 이상훈
협조

가로변정류소 이용환경 개선공사 관급자재 납품기한 연기

2015. 12

도시교통본부

(버스정책과)

가로변 정류소 이용환경 개선공사 관급자재 납품기한 연기

2015년 가로변 정류소 이용환경 개선공사와 관련 조달청에 구매 계약체결된 관급자재에 대하여 다음과 같이 납품기한을 연기하고자 함

1	관급자재 계약내역

□ 공사건명 : 2015년 가로변정류소 이용환경 개선공사

□ 납품기한 : 2015.11.25 ~ 2015. 12. 31

□ 구매금액 : 총9,522,830원

□ 구매내역 : 스틸그레이팅 외 7종

품 명	규격	단위	수량	단가	금액	업체
스틸그레이팅(뚜껑)	995*400*50	개	8	69,700	557,600	㈜태흥
스틸그레이팅(받침)	1010*410*55	개	8	15,900	127,200	㈜태흥
스틸그레이팅(뚜껑)	500*395*50	개	11	35,500	390,500	㈜태흥
스틸그레이팅(받침)	510*410*55	개	11	10,300	113,300	㈜태흥
가로수보호판	1500*1500*6	조	7	350,000	2,450,000	삼호씨엔티(주)
가로수보호판	1670*1670*6	조	7	36,300	254,100	삼호씨엔티(주)
소형고압블록	220*110*60	㎡	361	8,260	2,981,860	콘크리트협회
자연석 판석	30*200*200	㎡	84	30,940	2,598,960	통명석재
소 계	8종				9,473,520
조달수수료	0.54%				49,310
합 계				￦9,522,830

2	납품기한 연기사유

□ 공사건명 : 동절기간 2015.12.1.~2016.2.29.중 공사중지에 따라 소요 관급자재를 납품기한을 연기하고자 함

3	납품기한 연기내역

□ 납품기한 연기

구 분	납품기한 연기	비고
당 초	납품요구일 ~ 2015.12.30	60일 연 기
변 경	납품요구일 ~ 2016.02.29

〇 관급자재 품명, 수량, 단가, 계약업체 변경없음 (붙임 참조)

4	조치 계획

〇 2015. 12월중 : 관급자재 납품기한 연기의뢰

〇 2016. 02. 29 : 관급자재 납품완료.  끝.