투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(3회--최종)시행(2015년 노면표시 일상유지보수공사(연간단가)-남부)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2015년 노면표시 일상유지보수공사(연간단가)-남부』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회)--최종을 시행코자 합니다.

가.  공 사 명 : 2015년 노면표시 일상유지 보수공사(연간단가)-남부

나. 공사기간 : 2015.03.30 ~ 2015.12.31

다. 계 약 자 : ************

라. 설계변경(3회---최종)내역

(단위:원)

구 분	금 액		증 . 감	비 고
	당 초	변 경
총 공 사 비	790,172,000	1,014,877,720	증) 224,705,720
도 급 비	434,922,000	625,592,000	증) 190,670,000
관 급 비	355,250,000	389,285,720	증) 34,035,720

마. 변경사유 : 공사물량 증·감 및 추가사업(교통사고 잦은곳 개선사업 외

3개 사업)반영

붙  임 : 1. 설계변경(3회---최종)내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

주무관	박병규		도로보수과장	김석권		남부도로사업소장	12/14 민승기
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-6272	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5454	/전송	842-1634	/	gdssa214@seoul.go.kr	/	부분공개