문서번호	교통운영과-24297
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		중앙차로팀장	교통운영과장
이상돈		이병운	12/14 강진동
협 조

설계변경(정산) 보고

(2015.중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역)

2015. 12.

도시교통본부

(교통운영과)

설계변경(정산) 보고

대중교통 이용 편의 및 중앙버스전용차로 흐름개선을 위하여시행중인 「2015.중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

용역 개요

용 역 명 : 2015.중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역

도 급 자 : ㈜한국씨엠씨 대표 신현국

계약기간 : ‘15.3.11 ~ ’15.12.31

계약금액 : 금사천육백구십삼만삼천원(￦46,933,000)

설계변경 사유

과업대상 변경

연번	과업대상	과업 범위		변경 사유
		당초	변경
1	구로세무서 앞 중앙정류소 이설	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	-
2	동명여고 앞 중앙정류소 이설	기본 및 실시설계	기본설계	사업시기 조정
3	시조사삼거리 앞 중앙정류소 신설	기본 및 실시설계	기본설계	사업시기 조정
4	YTN 중앙정류소 횡단보도 개선	기본 및 실시설계	기본설계	사업시기 조정
5	구로디지털단지역 버스환승센터 개선	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	-
6	노들길 가로변버스전용차로 설치	-	기본설계	신규
7	홍은사거리 유턴 설치	-	기본 및 실시설계	신규
8	논현역~신사역 무단횡단금지시설 설치	-	실시설계	신규
9	국민은행~수유사거리 무단횡단금지시설 설치	-	실시설계	신규
10	영천시장~금화초교앞 무단횡단금지시설 설치	-	실시설계	신규

실시설계 물량변경에 따른 용역손해배상보험료 금액 조정(정산)

설계변경 내용

(단위:원)

구분	당 초	변 경	증 감	비 고
직접인건비	12,739,860	14,372,610	증)1,632,750
직접경비	10,316,420	11,842,785	증)1,526,365
제경비	14,013,846	15,809,870	증)1,796,024
기술료	5,350,741	6,036,495	증)685,754
소계	42,420,000	48,060,000	증)5,640,000
부가가치세	4,242,000	4,806,000	증)564,000
용역손해배상보험료	271,000	201,000	감)70,000
총 계(도급비)	46,933,000	53,067,000	증)6,134,000

조치 계획

상기 사항에 대해 설계변경 및 계약변경 요청(재무과)하고, 정산처리하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.