서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	해방촌 도시재생 실행방안 수립 용역 계약변경 의뢰

1. 주거재생과-18852호(‘15.12.14) 관련입니다.

2. ‘해방촌 도시재생 실행방안 수립 용역’에 대하여 아래와 같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 해방촌 도시재생 실행방안 수립 용역

나. 용역기간 : 2014.12.19 ~ 2015.12.31

다. 계약금액 : 269,000천원

라. 계 약 자 : ㈜인시티

마. 계약변경 내용 : 금액변경

구분	당 초	변 경	변경금액
금액(천원)	269,000	255,400	△13,600

바. 변경사유

○ 기한 내 활성화계획 확정이 곤란

- 주민주도로 마중물사업 선정 및 사업내용 구체화 작업 진행

- 지역 주민과의 지속적인 의사소통과 의견수렴 필요

- 관계부서 협의 및 추가사업 발굴 등에 상당기간이 소요

○ 1회 사고이월되어 과업기간 연장 불가(‘14년도 계약 체결)

사. 예산과목 : 평생 살고싶은 마을만들기 추진, 쾌적한 주거환경 조성, 주거지 재생사업 추진(도정), 주민참여형 주거재생 사업계획 수립

※ 2014년 주거환경과(주거환경개선과) 예산 활용 추진

붙임 1. 해방촌 도시재생 실행방안 수립 용역 설계변경 계획 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 합의각서 1부. 끝.

	주거재생과장
주무관	전동수		주거재생계획팀장	김재겸		주거재생과장	12/15 국승열
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	주거재생과-18908	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-7170	/전송	02-2133-0747	/		/	대시민공개