문서번호	토목부-26908
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	12/15 노우성
협조
	주무관		강철규

건설폐기물처리용역 설계변경(총괄4회,4차1회)

(용비교~행당중간 도로개설공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물처리용역 설계변경(총괄4회,4차1회)

(용비교~행당중간 도로개설공사)

『용비교~행당중간 도로개설공사』의 책임감리원으로부터 제출된 건설폐기물처리용역 설계변경 승인요청에 대한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ PH15-용행감-220호(2015.12.08.) 건설폐기물처리용역 설계변경(총괄4회,4차1회)

Ⅱ		용역개요

○ 위    치 : 성동구 금호동 용비교 북단 ~ 용비교 남단

○ 규    모 : 폐콘크리트 3,666톤, 폐아스콘 1,940톤, 건설폐재류 1톤

○ 용역기간 : 총차('12.4.5.∼'15.12.31.), 4차('15.2.1.∼ '15.12.31.)

○ 용 역 비 : 총차(135,830천원), 4차(21,000천원)

○ 용 역 사 : (주)해남건업

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경(총괄4회)

○ 도급비 (변경없음)

·당초 : 135,830천원

·변경 : 135,830천원

○ 용역기간 연장 (증182일)

·당초 : '12. 4. 5. ∼ '15.12.31.

·변경 : '12. 4. 5. ∼ '16. 5.31.

※ 시설공사 준공기한 연기에 따라 용역기간 연장

□ 설계변경(4차,1회)

○ 설계변경 내역

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증·감
폐콘크리트	톤	772.33	768.63	3.7
폐아스콘	톤	105.97	1380.12	1274.15
건설폐재류	톤	1.00	0	1

○ 용역비 증감현황(4차,1회)                          (단위:원)

구 분 (4차,1회)	당 초	변 경	증·감	비 고
공급가액	19,090,910	48,145,455	29,054,545
부가가치세	1,909,090	4,814,545	2,905,455
총용역비	21,000,000	52,960,000	31,960,000

□ 계약금액 변경                                             (단위 : 천원)

구 분	수 량			비 고
	당 초	변 경	증·감
총괄(4회)	135,830	135,830	-
4차(1회)	21,000	52,960	31,960

□ 용역기간 변경

구 분	용역기간		비 고
	당 초	변 경
총괄(4회)	'12. 4. 5.∼'15.12.31.	'15. 4. 5.∼'16. 5.31.	준공기한연장
4차(1회)	'15. 2. 1.∼'15.12.31.	'15. 2. 1.∼'15.12.31.	변경없음

Ⅳ		조치계획

○ 시설공사 준공기한 연기에 따른 용역기간 연기 및 건설폐기물 수량 증·감을 반영하여 설계변경을 요구한 책임감리원의 검토내용이 적정한 것으로 판단되어 계약사항을 조정하고자함.

붙  임 : 1. 감리 검토의견서 1부.
2. 설계변경내역서(총괄4회,4차1회) 각 1부.  끝.