함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(총차·1차분 1회) 및 2차수 용역시행[2015년 상수도 GIS DB 정확도개선사업(서북)]

1. 우리본부에서 시행하는「2015년 상수도 GIS DB 정확도개선사업(서북)」에 대하여 다음과 같이 설계변경(총차․1차 1회) 및 2차수 용역을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 :  2015년 상수도 GIS DB 정확도개선사업(서북)

나. 용역기간(총차) :  2015. 4. 1. ~ 2016. 3. 31.

- (1차) 2015. 4. 1. ~ 2015. 12. 31., (2차) 2016. 1. 1. ~ 2016. 3. 31

다. 계 약 자 : 중앙항업㈜ 외 2개사

라. 용역내용 : 상수도 시설물 측량 및 편집 217㎞

마. 설계변경 및 2차수 계약내역

(단위 : 원)

구 분	총용역 부기금액	1차수 금액	2차수 금액	비 고
당 초	*************	*************	**********
변 경	*************	*************	**********
증 감	-	-	-

- 변경사유 : 물량 증감에 따른 설계변경(금액 변동없음)

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 설계변경(총차․1차 1회) 시행 보고(2015년 상수도 GIS DB 정확도개선사업) 1부.

2. 설계변경(총차․1차 1회) 내역서 각 1부.

3. 계약내역서 2차분 1부. 끝.

주무관	신정민		공간정보과장	정윤홍		시설안전부장	강신재		상수도사업본부부본부장	12/15 정중곤
협조자	주무관	최명삼		주무관	문동환		주무관	김윤환
계약1팀장	김점선
시행	공간정보과-2552	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울특별시 상수도사업본부 4층 공간정보과	/
전화	02-3146-1552	/전송	02-3146-1529	/	jmsin@seoul.go.kr	/	부분공개