문서번호	시설보수과-9840
결재일자	2015.12.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		12/15 박병연
협조
	주무관		윤동원

-2015년도로시설물보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역-

설계변경 보고서(최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

시설보수과

- 2015년 도로시설물보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역 -

설계변경 보고서(최종)

1. 용역개요

❍ 용 역 명 : 2015년 도로시설물보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

❍ 용역규모 : 건설폐기물 운반/처리(4,926톤/2,295톤)

❍ 용역기간 : 2015. 6. 1 ~ 12. 31

❍ 도 급 자 : 금강도시환경(주) 대표 이상훈

❍ 총용역비 : 82,072,000원

2. 설계변경 내용

❍ 물량변경 내역                                     (단위 : 톤)

연번	공사명	건 설 폐기물	변경전		변경후		증·감
			운반	처리	운반	처리	운반	처리
계			4,925	2,295	4,540.76	2,614.71	감95.12	증319.66
1	도로시설물일상 유지보수공사	폐콘	500	500	23.05	23.05	감476.95	감476.95
		폐아	500	500	987.83	987.83	증487.73	증487.73
		폐아(무대)	300	-	-	-	-	-
		혼합	50	50	88.78	88.78	증38.78	증38.78
2	외발산지하차도 보수공사	폐콘	15	15	15	15	-	-
		폐아	-	-	-	-	-	-
		폐아(무대)	1,135	-	736	-	감399.0	-
3	고척2지하차도 보수공사	폐콘	-	-	-	-	-	-
		폐아	-	-	-	-	-	-
		폐아(무대)	1,195	-	1,190	-	감5.0	-
4	서울교보수공사	폐콘	-	-	-	-	-	-
		폐아	1,230	1,230	1,500.1	1,500.1	증270.10	증270.10
		폐아(무대)	-	-	-	-	-	-

❍ 물량 변경사유

▶ 도로시설물일상유지보수공사 : 공사물량 증감에 따른 폐기물량 변경

▶ 외발산지하차도보수공사 : 당초 설계물량 착오에 따른 폐기물량 변경

▶ 서울교보수공사 : 아스팔트 절삭두께 변경(당초8cm→ 변경8~11.5cm)

에 따른 폐기물량 변경

3. 용역비 변경내역

❍ 용역비 변경내역                                       (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감
용 역 비	82,072,000	88,902,000	(증) 6,830,000
공급가액	74,610,909	80,820,000	(증) 6,209,091
부가가치세	7,461,091	8,082,000	(증) 620,909

❍ 공사장별 변경내역                                     (단위: 원)

연번	공사명	당 초	변 경	증, 감
1	도로시설물일상유지보수공사	26,940,000	30,269,000	증)3,329,000
2	외발산지하차도보수공사	10,860,000	7,128,000	감)3,732,000
3	고척2지하차도보수공사	11,152,000	11,113,000	감) 39,000
4	서울교보수공사	33,120,000	40,392,000	증)7,272,000

4. 조치의견

❍ 상기 내용과 같이 설계변경 하고 도급자로 하여금 재계약        토록 통보하고자 함.

붙 임 : 설계변경 내역서(최종) 1부.   끝.