투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	2015년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 준공기한 연기의뢰

1. 기전과-13351호(2015.12.15.)와 관련입니다.

2. 2015년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2015.10.5. ~ 2015.12.21.

다. 계약업체 : ㈜신한네오텍 대표 강미순

라. 계약금액 : 141,425,190원(금일억사천일백사십이만오천일백구십원)

마. 준공기한 연기내용 : 당초 2015년 12월 21일에서 2016년 6월 30일까지 연기

바. 준공기한 연기사유 귀책소재 : 서부도로사업소

사. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

아. 준공기한 연기사유 : 마포구 대흥동 3-108 앞 예산이 도로굴착 심의기간(상하반기 : 1월, 7월) 이후에 재배정(2015.9.10.)되어 도로굴착 미승인으로 공사기간 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기보고서(기전과-13351호) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		주무관	윤석주		기전과장	김호성		서부도로사업소장	12/15 배광환
협조자	주무관	윤미란		관리단속과장	代송세진		계약1팀장	김점선
시행	기전과-13377	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개