시  민

문서번호	시설관리과-21309
보존기간	년
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	기전팀장	시설관리과장
차경호	김충완	12/15 이계환
협 조

2015년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가) 완료 보고(1차수)

2015.12

북부수도사업소

(시설관리과)

2015년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가) 완료 보고(1차수)

2015년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가) 사업에 대한 물량검토, 설계변경심의, 변경계약 체결 등 금년도(1차분) 완료 사업에 대하여 준공 하고자 보고 드림

□ 사업개요

❍ 건    명 : 2015년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)

❍ 공사내역 : 가압장, 배수지, 증압장 정기점검 및 원격제어반 수리

❍ 계약금액 : 59,047,000원

구 분	총계약금액	1 차분	2 차분
도 급 비	59,047,000	47,047,000	12,000,000

❍ 용역기간 : 2015.04.01. ～ 2016.3.31.(1년)

❍ 계약업체 : ㈜ 주인정보시스템  대표 : 김근호  TEL: 02-544-3271

□ 추진내용

❍ 계약일자 : 2015. 3. 31

❍ 가압장, 배수지, 증압장 점검 및 수리(2015.04.01. ～ 2016. 03. 31)

(단위:회수)

구 분	계획물량	1차분(완료)	2차분(예정)	비고
1. 아리수통합정보센터 점검	4	3	1
2. 가압장 정기점검	26	19	7
3. 증압장 정기점검	81	61	20
4. 배수지 정기점검	18	13	5
5. 자동제어반 수리	16	16	-
총 계	145	112	33

❍ 2015년 정기점검 및 수리비용 지급내역

구 분	계약금액	지출금액				비고
		지급완료 (‘15.4~10월)	지출예정
			‘15.11월	‘15.12월	‘16. 1～3월
총부기금액	59,047,000	30,663,050
1 차수	46,660,000	30,663,050	12,724,800	3,272,150	-
2 차수	12,387,000				12,387,000

❍ 설계변경(1차수) 계약체결 : 2015.12. 9〔행정지원과-23565(2015.12.9.)〕

설계변경 검토 보고 및 자체심의 시행 : 2015.12.04

설계변경 시행 및 계약의뢰           : 2015.12.09

설계변경 주요내용

․작업지시 사항에 대한 신규내역 및 물량 증․감 변경사항 반영

․공사기간이 회기년도 경과되어 총부기금액 변경 없이 차수별 계약          금액 조정

구 분	당 초	변경금액	증감액(원)	부기기한	비고
총부기금액	59.047.000	59.047.000	-	‘15.04.01.～’16.03.31
1 차수	47.047.000	46.660.000	△387.000	‘15.04.01.～’15.12.31
2 차수	12.000.000	12.387.000	387.000	‘16.01.01.～’16.03.31

□ 보고자 의견

❍ 2015년 자동제어설비 유지보수용역(연간단가) 1차수 공사에 대한 검수결과 설계서 및 과업지시 내용에 의거 차질없이 이행하여 1차수 물량에  대하여 준공처리하고,

❍ 2차수 계약금액(12,387,000원)는 ‘15. 12. 24까지 계약의뢰 하여 사업  추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 설계변경 품의서 1부.

2. 준공내역서(1차수, 2차수) 1식.

3. 차수별 작업완료 보고서 1식.  끝.