문서번호	기전설비과-2199
결재일자	2015.12.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이학수		김남수	12/15 박상돈
협조
	주무관		성태진

한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

설계변경(정산) 검토보고

2015. 12.

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

설계변경(정산) 검토 보고

한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역의 신규 품목 발생, 물량의 증·감 및 제경비 정산 내역에 대한 설계변경(정산) 검토 보고임

용역현황

○ 용 역 명 : 2015년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

○ 용역업체 : ***************

○ 용역기간 : 2015. 3. 11 ~ 2015. 12. 31

○ 용 역 비 : ***********

○ 용역개요

◼ 11개소 안내센터 CCTV시스템 18대

◼ 감시카메라 115대, 비상벨 36개소

◼ 모니터, 비디오서버 등 각 종 기기 정기점검 및 수시점검

설계변경 현황

○ 사    유

◼ 추정물량으로 설계된 작업물량이 점검 및 정비 추진과정 중 신규품목 및 물량변동 발생으로 수량(내역)조정 필요

◼ 노무비 변경에 따른 보험료 조정(정산)

○ 주요변경(증·감) 내역

공 종	규 격	단위	수 량		비고
			변경 전	변경 후
CCD COLOR CAMERA	0.0002LUX	대	5	2	3(감)
AUTO IRIS LENS	5-50㎜	대	5	1	4(감)
VIDEO SERVER	H.264, 1CH	대	5	2	3(감)
비상벨	옥외방수 마이크내장	대	3	0	3(감)

공 종	규 격	단위	수 량		비고
			변경 전	변경 후
공유기	4포트	대	20	3	17(감)
LED MONITOR	CCTV전용 19″	대	3	1	2(감)
NVR 수리	16CH	대	2	4	2(증)
CAMERA 수리	회전형	대	4	0	4(감)
무선송수신기	5.8㎓,안테나일체형(50Mbps)	대	4	0	4(감)
무선송수신기 Bracket	벽부형 제작	대	4	0	4(감)
UTP 케이블	Cat.6	m	20	102	82(증)
후렉시블전선관	일반방수 16㎜	m	19	60	41(증)
함체	STS방우형	대	1	0	1(감)
HORN SPEAKER	20W	대	1	0	1(감)

○ 신규 품목 내역

공 종	규 격	단위	수 량		비고
			변경 전	변경 후
영상전송장치(DVR)수리	나들목 DVR(HDD 1TB 교체	대	0	2	2(증)
영상전송장치(DVR)수리	나들목 DVR(FAN) 교체	대	0	1	1(증)
DOME HOUSING	옥외용, 스피드돔용	대	0	1	1(증)
SPEED DOME CAMERA	회전형, 0.0002LUX	대	0	1	1(증)
SPEED DOME CAMERA 브라켓	SUS, 벽부형제작	대	0	1	1(증)
IP 비상벨	모장치, 10/100Base	대	0	1	1(증)
IP 비상벨	자장치, 10/100Base	대	0	5	5(증)
IP 비상벨 BOX	ABS재질, 200×300×180	대	0	4	4(증)
Megapixel SPEED DOME CAMERA	회전형, 200만화소	대	0	1	1(증)
N.V.R	FULL HD 16CH	대	0	1	1(증)
HDD	2TB	대	0	1	1(증)
CAMERA BRACKET	벽부형	대	0	1	1(증)

○ 보험료 정산

보 험 종 류	적 용 조 건	단위	수 량		비고
			변경 전	변경 후
산재보험료	노무비의 3.8%	원	1,848,321	1,819,844	28,477(감)
고용보험료	노무비의 0.87%	원	423,168	416,648	6,520(감)
건강보험료	직노무비의 1.7%	원	858,580	740,801	117,779(감)
연금보험료	직노무비의 2.49%	원	1,257,567	1,085,056	172,511(감)

○ 설계변경 금액

구 분		변경 전	변경 후	증·감	비 고
용역비	공급가액	85,243,557원	85,243,555원	2원(감)	원단위 절사
	부가세	8,524,356원	8,524,356원	0
	합계	93,767,910원	93,767,910원	0

보고자 의견

○ 기성 2차 ~ 5차(준공)에 미포함 된 내역 및 신규 발생 품목은 금번 설계변경(정산)에 포함하여 설계변경 실시

○ 제비율 검증 결과 설계변경(정산)이 적정하다고 판단됨

향후계획

○ 물량변동 내역에 의거하여 설계변경 시행 및 계약 의뢰

○ 준공검사 실시 및 준공금 지급

붙임. 1. 설계변경 내역서 1부

2. 제비율 검증 1부

3. 합의각서(감시장치) 1부. 끝.