투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	관급자재(도막형바닥재) 수량변경 및 납품기한 연기요청 (자전거도로 업그레이드공사)

우리부서에서 시행하고 있는 「한강공원 자전거도로 업그레이드공사」에 사용되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 수량 및 납품기한 변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내역

납품 요구번호	품명	규격	물품 식별변호	단위	당초		변 경		증 감
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
12-15-1- 23803-00	도장형바닥재	에코피아 T1.5mm	22047509	㎡	1,000	24,330,000	1,110	27,006,300	증110	증2,676,300
	조달수수료					131,380		145,830		증14,450
	합계					24,461,380		27,152,130		증2,690,750

나. 납품기한 연기 : (당초) 2015.12.15.  (변경) 2015.12.25.

다. 변경사유 : 소요물량 증가 및 공사시기 미도래.   끝.

	시설관리과장
주무관	이상욱		시설관리과장	12/15 박희철
협조자
시행	시설관리과-3722	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	fish21c@seoul.go.kr	/	대시민공개