문서번호	시설과-9382
결재일자	2015.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김영수	한종수	김한준	12/15 이용태
협 조

『2015년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)』

설계변경(2회)시행보고

2015. 12

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『2015년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사』

설계변경(2회)보고

『2015년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사』시행과  관련하여 현장여건 및 시공물량의 증.감 발생에 따라 설계변경을 시행하고자 보고드림

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2015년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)

공사개요

콘크리트 45㎥, 석축정비 15㎡, 시설물도장 3,030㎡

공원내 포장 610㎡,  휀스교체 20경간,   시설물정비 1식

공사기간 : 2015.06.13. ~ 2015.12.30

계약금액 : 265,295,000원

도 급 자 : 선구산업(주)  박 찬 웅

Ⅱ		설계변경 내용

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증	비고
공 사 비		265,295,000	292,030,000	26,735,000
도급비	공급가액	241,177,273	263,918,164	22,740,891
	부 가 세	24,117,727	26,391,816	2,274,089
	폐기물처리비	-	1,720,020	1,720,020

남산및산하공원 시설물보수정비사업, 남산및산하공원 시설물보수정비, 시설비

설계변경사유

남산 및 산하공원내 시설물 정비를 위한 시공작업지시 시공중

현장여건 및 물량증간 발생에 따른 변경

- 낙산공원 비탈면 토석류 제거(동숭동123)등 2건(시설과-2067)

- 낙산공원 공가철거 및 비우당주변 정비등 6건(시설과-5978)

- 남산신약수 및 남산산악회 배드민턴장 정비등 6건(시설과-7603)

- 간데매공원 석면제거 및 장충체육회 배수로정비등 6건(시설과-8255)

- 남산 회현자락 잠두화장실 누수정비 1건(시설과-8583)

공원내 주민편의 및 안전사고 예방을 위한 긴급지시등에 따른   시공물량 증·감 및 계약비목(신규공종 발생등) 변경으로 인한 수량변경

Ⅲ		행정사항

『설계변경 내용』과 관련하여 현장여건에 따른 따른 신규공종 발생

및 물량변동 사항에 대하여 설계변경 및 정산시행에 반영하고자 함

붙 임 : 변경설계서 1부. 끝.