투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산)시행(도림천4복개(우안)포장및보수공사)

1. 서울시시설관리공단 공사감독1처-11733(2015.12.11)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 “도림천4복개(우안) 포장및보수공사”의 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행하고자 합니다

가. 공 사 명 : 도림천4복개(우안) 포장및보수공사

나. 공사기간 : 2015.07.22. ~ 2015.12.18.

다. 도 급 자 : 에이비씨상사㈜ 대표 손형탁

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감
총공사비		993,257,000	997,299,090	증 4,042,090
도급비	공급가액	809,824,546	796,700,000	감 13,124,546
	부가가치세	80,982,454	79,670,000	감 1,312,454
	합계	890,807,000	876,370,000	감 14,437,000
관급자재비		102,450,000	120,929,090	증 18,479,090

마. 예산과목 : 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 도림천4복개(우안)포장및보수공사, 시설비및부대비, 시설비

바. 변경사유 : 실 시공 물량 정산

붙 임 : 1) 설계변경사유서 1부.

2) 설계변경보고서 1부.

3) 제비율검증표 및 합의각서 각1부.

4) 설계변경내역서 및 관련서류 각 부.  끝.

주무관	정규용		시설보수과장	이용재		남부도로사업소장	12/15 민승기
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-4857	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	부분공개(5)