함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(광암정수센터 관내 하수관 부설공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『 광암정수센터 관내 하수관 부설공사』의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 광암정수센터 관내 하수관 부설공사

나. 공사내용 : DC 이중벽관설치:D=250mm, 오수받이설치:D=300mm,7개소

오수맨홀설치:D=900mm,11개소, 정화시설폐쇄:6개소

다. 공사금액 : 금206,100,000원

라. 도급업체 : 세양건설㈜  대표 기세광

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2015. 10. 19 ~ 12. 17

- 변  경 : 2015. 10. 19. ~ 2015.12.30.

붙임 : 1. 준공기한연기의뢰서 1부

2. 연기 보고서 1부

3. 합의서 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	김우승		정수시설과장	김창현		광암아리수정수센터소장	12/15 차윤기
협조자	주무관	이해승
시행	정수시설과-6055	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화		/전송		/		/	대시민공개