투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	(주)협우지여엔지니어링 대표 김영곤
(경유)
제 목	2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차) 설계변경 승인회신

1. 문서번호 협우지여 제15-신호기92호(2015.12.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 감리업무를 수행 중인 2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)의 설계변경 제출에 대하여 아래와 같이 승인하고 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

나. 공사기간 : 2015.10.13. ~ 2015.12.21.

다. 도 급 자 : ㈜참좋은전기 대표 김미경

라. 설계변경 승인내용

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	24,190,800원	20,493,000원	감)3,697,800원

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/15 김호성
협조자	주무관	윤석주
시행	기전과-13392	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개