함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리 용역 설계변경 시행

1. 우리정수센터에서 시행중인 『2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리 용역

나. 도 급 자 : (주)향림  대표 정연순

다. 도 급 액 : 147,530,400원

라. 계약년월일 : 2015. 4. 10.

마. 착공년월일 : 2015. 4. 15.

바. 준공기한 : 2015. 12. 22.

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

아. 설계변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증	감
총공사비	147,530,400	116,660,000	-	30,870,400
도급비	147,530,400	116,660,000	-	30,870,400

따로붙임 1. 변경설계 내역서       1부.

2. 설계변경 사유서      1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고서   1부.

4. 합의서               1부.                 끝.

주무관	김동우		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	12/15 박기석
협조자	주무관	하수용
시행	정수시설과-3961	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개