투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	(주)협우지여엔지니어링 대표 김영곤
(경유)
제목	2015년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 준공기한 연기 승인회신

1. 문서번호 협우지여 제15-신호기91호(2015.12.11.)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 감리업무를 수행 중인 2015년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사의 준공기한 연기요청에 대하여 아래와 같이 승인 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2015.10.5. ~ 2015.12.21.

다. 준공기한 연기 승인내용

- 당초 2015년 12월 21일에서 2016년 6월 30일까지 연기

라. 연기사유 : 마포구 서강대후문의 선행 공정인 토목 미시행(마포구청 토목과)으로 공사기간 연기.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/15 김호성
협조자	주무관	윤석주
시행	기전과-13397	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개