투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[서울혁신파크 1동 전력설비 개선 전기공사 감리용역]

1. 설비부-16122(2015.12.14.)호와 관련입니다.

2.『서울혁신파크 1동 전력설비 개선 전기공사 감리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울혁신파크 1동 전력설비 개선 전기공사 감리용역

나. 용 역 사 : ㈜나래디엔에이 대표 김 중

다. 준공기한 연기의뢰 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	‘15. 11. 11. ~ ‘15. 12. 31.	‘15. 11. 11. ~ ‘16. 02. 29.	금액변동 없음

라. 귀책소재 및 연기사유

1). 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

2). 지체상금 부과여부 : 미부과

3). 연기사유 : 전기공사 준공기한 연기에 따른 감리용역 기간 연장

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 검토 보고서 1부.

3. 준공기한 연기 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		환경설비과장	유병기		설비부장	12/15 박기형
협조자	경리과장	박환
시행	설비부-16326	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)