문서번호	진료부-12667
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	영상의학팀장	진료부장	서북병원장
조진용	주무학	서해숙	12/15 나백주
협 조
	간호1과장			양정옥
	원무과장			代김태기

디지털 진단용 엑스선 장치 설치 계획

2015. 12.

디지털 진단용 엑스선 장치 설치 계획

최신 의료장비인 디지털 진단용 엑스선 장치를 설치하여 공공의료가 필요한 시민에게 질높은 의료서비스를 제공하고자 함.

추진근거

Ⅰ

디지털 진단용 엑스선장치 구매계획 (진료부-8228, ‘15.8.19.)

통합구매 최종 낙찰자 결정 [서울의료원 계약심시팀-2223,‘15.12.11]

구매장비

Ⅱ

장 비 명	용 도	설치장소	비 고
디지털 진단용엑스선 장치	일반촬영	일반촬영실	본관 영상의학과

Ⅲ

추진일정

세부일정

일 정	내 용	대처 방안(주/야간)
12.16.(수)	기존장비 철거 공사 (18시 이후) - 영상의학과 물품창고 보관	특수촬영실 : 일반촬영 병행 (오후) . 병동 일반촬영 시 오후 1시 이후 검사 . 외래 및 응급환자는 동관 안내 및 촬영 - 서관 : 흉부촬영 (건강검진) ※ 시설공사등 업무시간 종료 및 휴일활용 ※ 부서업무 협조요청 및 공지
12.17.(목) ~12.20.(일)	사용중지신고 (기존장비) 내부시설 공사 (천장 및 바닥공사)
12.21.(월) ~12.23.(수)	장비 설치 공사
12.24.(목)	시범운영 (신규 설치사용 신고)
12.28.(월)	정상운영

* 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ

행 정 사 항

간호부

공사기간 중 영상의학 검사 일정 조정 협조

- 병동(본관 및 서관) 일반촬영 : 본관 특수촬영실 (오후 1시 이후)

- 외래 및 응급환자 촬영 : 동관 영상의학과

원무과

시설팀 전기공사 등 관련 협조

전산실 장비 설치 및 EMR 연동 등 협조

기존장비 불용품의 소요조회 후 매각 검토

(서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제71조, 제72조)

PACS 업체

PACS 업체와 장비 연동을 위한 협조