문서번호	조경과-6622
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장
조진성	강금완		강인호		12/15 심상원
협 조

「치유숲길 조성공사」설계변경 검토보고

2015. 12.

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「치유숲길 조성공사」 설계변경 검토보고

「치유숲길 조성공사」 추진과 관련 현안사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 설계변경하고자 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 치유숲길 조성공사

○ 공사기간 : 2015. 10. 16 ~ 2015. 12. 24

○ 공사내용 : 숲길 정비, 치유공간 조성, 수목식재 등

○ 총공사비 : 429,791,900원 (도급액 340,837,900원, 관급비 88,954,000원)

○ 도급업체 : ㈜고려원조경 이수희

□ 변경내용 검토

1) 주요 변경내용

○ 기 검토한 ‘실정검토 보고사항’ 반영(조경과-6467, ‘15. 12. 7)

- 체조데크 규모 조정 및 주변 수목식재

- 사각쉘터, 목공장 위치 이동에 따른 데크 등 시설물 및 주변식재 물량 변경

- 프로그램 참여자를 위한 먼지털이기 설치 등 (실정검토 보고서 별도첨부)

○ 산책로변과 토사유출 유려지 등 식재를 위해 수종 및 물량 변경

○ 기타 현장여건에 따른 실시공물량 반영 등

2) 설계변경금액 및 처리방안

○ 도급액 기준 \6,432,100원 증액 (변경 설계서 참조)

- 본공사 낙찰차액 활용 (시비 재배정)

□ 보고자의견

○ 위 보고한 바와 같이 본 공사에 대하여 설계변경 조치하고자 함.

붙임 : 변경설계서 및 실정검토보고서  각 1부.  끝.