문서번호	토목부-26943
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	12/15 노우성
협조

설계변경(총괄5회, 3차2회) 및 준공기한 연기

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로개선공사 건설폐기물처리용역)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경(총괄5회, 3차2회) 및 준공기한 연기

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 건설폐기물처리용역)

폐기물처리용역(3차) 시행중 현장여건 변동으로 인한 설계변경 및 토목공사 준공기한 연장에 따른 폐기물처리용역 준공기한 연기에 대한 검토보고임.

1		관련근거

❍ 한국종합 2015-12-480호(2015.12.14.) 건설폐기물 처리용역 설계변경 승인요청

❍ 토목부-26804호(2015.12.14.) 시설공사 준공기한 연기

2		용역개요

❍ 용 역 명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로개선공사 건설폐기물처리용역

❍ 규    모

- 폐콘크리트 : 23,523톤, 폐아스콘 : 5,890톤

- 건설폐자류 : 583톤, 혼합폐기물 : 74톤

❍ 용역기간 : 총괄 2012. 7. 5. ~ 2015.12.31.(3차 2014. 6. 1. ~ 2015.12.31.)

❍ 용 역 비 : 총괄 605,700천원(3차 94,500천원)

❍ 용 역 사 : ㈜신명

3		감리단 보고내용

❍ 설계변경 주요내용

- 총 괄

구 분	규 격	수량(톤)	변 경 내 용	비 고
폐아스콘 (덩어리)	L=26.8㎞	증1,610	․가교 포장 아스팔트 깨기 - 당초(t=2㎝)174톤→변경(t=20㎝) 1,745톤 : 증 1,571톤 ․강변북로 임시 접속도로 포장깨기 - 당초 0톤 → 변경 39톤 : 증 39톤	도시기반시설본부 15-6948호
페아스콘 (절삭)	L=26.8㎞	증232	․가교 #1,2위치 아스팔트 절삭 - 당초 0톤 → 변경 197톤 : 증 197톤 ․강변북로 접속부 절삭 - 당초 0톤 → 변경 35톤 : 증 35톤	도시기반시설본부-15-6948호

구 분	규 격	수량(톤)	변 경 내 용	비 고
폐콘크리트	L=26.8㎞	증173	․지중 교각기초 미철거(P3, P6, P8, P15, P18) - 당초 810톤 → 변경 754.3톤 : 감 55.7톤 ․연단거리 확장(코핑높이 상이) - 당초 0톤 → 변경 23.3톤 : 증 23.3톤 ․PC방호벽 재활용 감소 - 당초 409톤 → 변경 374.2톤 : 감34.8톤 ․가교#1,2위치 경계석,L형 측구 철거 - 당초 0톤 → 변경 151.8톤 : 증 151.8톤 ․기존고가 유지보수 절삭 - 당초 0톤 → 변경 88.2톤 : 증88.2톤	토목부-22050호 (2013.11.28.) 도시기반시설본부-15-1303호 도시기반시설본부-15-6948호
건설폐재류	L=26.8㎞	감32	․신상도 지하차도 확장공사(4차) - 당초 416톤 → 변경 487톤 : 증71톤 ․고가교 철거 수량정산 - 당초 167톤 → 변경 128톤 : 감 39톤	SMIH-14-33250호
혼합폐기물		감20.1	․신상도 지하차도 확장공사(4차) - 당초 74.1톤 → 변경 54톤 : 감 20.1톤	SMIH-14-33250호

- 3차

구 분	규 격	수량(톤)	변 경 내 용	비 고
폐콘크리트	L=26.8㎞	증583	․지중 교각기초 미철거(P3, P6, P8) - 당초 779.8톤 → 변경 724.1톤 : 감 55.7톤 ․연단거리 확장(코핑높이 상이) - 당초 0톤 → 변경 23.3톤 : 증 23.3톤 ․PC방호벽 철거 - 당초 0톤 → 변경 374.2톤 : 증374톤 ․가교#1, 2위치 경계석, L형 측구 철거 - 당초 0톤 → 변경 151.8톤 : 증 151.8톤 ․기존고가 유지보수 절삭 - 당초 0톤 → 변경 88.2톤 : 증88.2톤	토목부-22050호 (2013.11.28.) 도시기반시설본부-15-1303호 도시기반시설본부-15-6948호 도시기반시설본부-15-4846호
폐아스콘 (덩어리)	L=26.8㎞	증1,745	․가교 포장깨기 - 당초 0톤 →변경(t=20㎝) 1,745톤 : 증 1,745톤	도시기반시설본부-15-6948호
페아스콘 (절삭)	L=26.8㎞	증1,635	․가교#1,2위치 아스팔트 절삭 - 당초 0톤 → 변경 197톤 : 증 197톤 ․서빙고로 아스팔트 절삭 - 당초 1,637톤 → 변경 199톤 : 증 1,438톤	도시기반시설본부-15-6948호
건설폐재류	L=26.8㎞	감32	․신상도 지하차도 확장공사(4차) - 당초 416톤 → 변경 487톤 : 증 71톤 ․고가교 철거 수량정산 - 당초 167톤 → 변경 128톤 : 감 39톤	SMIH-14-33250호
혼합폐기물		감20.1	․신상도 지하차도 확장공사(4차) - 당초 74.1톤 → 변경 54톤 : 감 20.1톤	SMIH-14-33250호

❍ 수량 및 용역비 증·감 현황

- 총 괄

공 종	규격	단위	수량			공사비(천원)			비고
			당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
1. 폐기물 운반비						181,718	192,617	10,899
폐콘크리트	L=26.8㎞	톤	23,523	23,696	173	147,372	148,455	1,083
폐아스콘	L=26.8㎞,덩어리	톤	2,257	3,867	1,610	12,021	20,596	8,575
폐아스콘	L=26.8㎞,절삭	톤	3,633	3,865	232	18,557	19,742	1,185
건설폐재류	L=26.8㎞	톤	583	615	32	3,304	3,486	182
혼합폐기물		톤	74	54	-20	464	338	-126
2. 폐기물 처리비						369,023	395,174	26,151
페콘크리트		톤	23,523	23,696	173	285,052	287,148	2,096
폐아스콘	덩어리	톤	2,257	3,867	1,610	30,244	51,818	21,574
폐아스콘	절삭	톤	3,633	3,865	232	38,757	41,242	2,485
건설폐재류	L=26.8㎞	톤	583	615	32	12,438	13,121	683
혼합폐기물		톤	74	54	-20	2,532	1,845	-687
합계						550,741	587,791	37,050
공급가액(보정)						550,636	587,691	37,055
부가세						55,064	58,769	3,705
도급액						605,700	646,460	40,760

- 3 차

공 종	규격	단위	수량			공사비(천원)			비고
			당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
1. 폐기물 운반비						26,329	47,682	21,353
폐콘크리트	L=26.8㎞	톤	2,980	3,563	583	18,670	22,322	3,652
폐아스콘	L=26.8㎞,덩어리	톤	343	2,088	1,745	1,827	11,121	9,294
폐아스콘	L=26.8㎞, 절삭	톤	445	2,080	1,635	2,273	10,625	8,352
건설폐재류	L=26.8㎞	톤	546	578	32	3,095	3,276	181
혼합폐기물		톤	74	54	-20	464	338	-126
2. 폐기물 처리비						59,636	107,521	47,885
페콘크리트		톤	2,980	3,563	583	36,112	43,176	7,064
폐아스콘	덩어리	톤	343	2,088	1,745	4,596	27,979	23,383
폐아스콘	절삭	톤	445	2,080	1,635	4,747	22,189	17,442
건설폐재류	L=26.8㎞	톤	546	578	32	11,649	12,332	683
혼합폐기물		톤	74	54	-20	2,532	1,845	-687
합계						85,965	155,203	69,238
공급가액(보정)						85,909	155,145	69,236
부가세						8,591	15,515	6,924
도급액						94,500	170,660	76,160

❍ 금회 설계변경 현황

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총괄 5회	605,700,000원	646,460,000원	증 40,760,000원
3차 2회	94,500,000원	170,660,000원	증 76,160,000원

❍ 준공기한 연장

- 연기사유 : 토목공사 준공기한 연기에 따른 폐기물처리용역 연기

- 준공기한

· 당 초 : 2012. 7. 5. ~ 2015.12.31.

· 변 경 : 2012. 7. 5. ~ 2016. 4.30.

4		보고자 검토 및 조치의견

❍ 상기 감리단 보고내용 검토결과 토목공사 현장여건 반영 및 준공기한 연장에 따른 본용역 설계변경 및 준공기한 연기가 필요하며

❍ 상기 사항에 대하여 변경계약을 체결하여 원활한 사업을 추진하고자 함.

❍ 총괄 및 3차 변경계약 내용                                          (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
총괄 5회	용 역 비	605,700,000	646,460,000	40,760,000
	용역기간	2012.07.05. ~ 2015.12.31	2012.07.05. ~2016.04.30	증 4개월
3차 2회	용 역 비	94,500,000	170,660,000	76,160,000
	용역기간	2014.06.01.~ 2015.12.31	2014.06.01. ~2015.12.31	-

붙 임 : 1) 건설폐기물처리용역 설계변경 승인요청 1부.

2) 시설공사 준공기한 연기 1부.  끝.