문서번호	토목부-27018
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	12/15 노우성
협조

우수관로 GIS DB 구축비용 정산

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

우수관로 GIS DB 구축비용 정산

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

우수관로 GIS DB 구축에 따른 공공측량성과 수수료를 실지급한  금액으로 정산코자 검토 보고하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012.8 ~ 2015.12

○ 도 급 비 : 18,242백만원

○ 시 공 사 : (주)신성건설 외2개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1개사

□ GIS DB 구축 현황

[ 본선구간 ]

Φ450, L=600m

Φ450, L=578m

Φ500, L=50m

Φ600, L=481m

Φ500, L=71m

Φ600, L=307m

Φ450, L=120m

Φ450, L=101m

Φ800, L=65m

고덕교

선사로

고덕차량기지

우수BOX (1.5×1.5)

L=323m

[ 강일삼거리 ]

□ GIS DB 구축 연장 변경 및 정산 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 감		비 고
연 장	km	3.934	2.798	감	1.136
공사비	천원	33,550	23,859	감	9,691

□ 감리단 검토의견

○ “도로법 시행규칙 제21조”에 의하여 우수관로 시설에 대하여 GIS DB 구축 공공측량성과 심사 기관인 대한측량협회의 “공공측량성과 수수료 고지”를 반영한 수량 정산은 타당하므로 이를 설계변경시 반영코자 합니다.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리 함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 감)9백만원

붙 임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.