투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	동대문디자인플라자 장애인점자블럭 설치공사 계약변경(공사기간 연장) 의뢰

우리본부에서 시행중인 『동대문디자인플라자 장애인점자블럭 설치공사』와 관련하여 아래와 같이 계약변경(공사기간 연장)의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동대문디자인플라자 장애인점자블럭 설치공사

나. 위    치 : 중구 을지로 281(동대문디자인플라자)

다. 계 약 자 : ㈜민정토건 백승언

라. 계약요청 내용 : 공사기간 연장(41일)

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	‘15.11.13 ~ ’15.12.17	‘15.11.13 ~ ’16.01.27	증41일

붙임 : 공사기간 연장 검토보고서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	조민형		복지시설과장	12/15 조영수
협조자
시행	건축부-14378	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2651	/전송	02-3708-2659	/	jplus525@seoul.go.kr	/	부분공개(5)