문서번호	정수시설과-3954
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		안길찬	12/15 박기석
협조

2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리용역

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2015.  12.

강북아리수정수센터

정수시설과

2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리용역

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리용역』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

1. 심의대상

가. 용 역 명 : 2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리용역

나. 계약업체 : (주)향림  대표 정연순

다. 용역기간 : 2015. 4. 15. ~ 2015. 12. 22.

라. 계약금액 : 147,530,400원

마. 용역개요 : 잔디깍기 129,834㎡, 풀깍기 424,257㎡, 풀뽑기 43,798㎡ 등

2. 심의일시 : 2015. 12. 14.(월)

가. 심의장소 : 강북아리수정수센터 정수시설과 사무실

3. 설계변경 현황

가. 용역비 변경개요

구 분	금 액		증, 감
	당 초	변 경
도 급 비	147,530,400	116,660,000	-30,870,400

나. 주요 공종 변경사항

- 풀깍기, 수고 0.9m이하 관목전정, 낙엽 및 넝쿨제거, 위험수목 제거 등 증가

- 잔디깍기, 풀뽑기, 풀 잔재처리, 교목 및 관목전정, 시비, 잔디붙임 등 감소

- 건강, 연금 및 노인장기요양보험료 미지급에 따른 정산

▸ 주요 물량 증, 감

공 종	규격	단위	수 량		증, 감
			당 초	변 경	증	감
잔디깍기		㎡	129,834	31,427	-	98,407
풀깍기		㎡	424,257	426,960	2,703	-
풀뽑기		㎡	43,798	36,658	-	7,140
풀 잔재처리		회	200	159	-	41
교목전정		주	560	232		328
관목전정		㎡	3,500	3,656	156	-

4. 심의내용 및 결과

공 사 명	심 의 내 용	결 정 내 용
2015 강북정수센터 취,정수장 조경관리 용역	◦ 설계변경 타당성 ◦ 신규공종 단가산출 타당성 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정성 ◦ 각종 제반규정 준수여부	◦ 설계변경 타당 ◦ 신규공종 단가 타당 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정 ◦ 각종 제반규정 준수타당

※ 본청 원가관리시스템에 의하여 제비율 검증 실시(2015. 12. 11)

5. 조치의견

용역 설계변경 심의결정 내용과 같이 물량 및 계약금액에 대한 정산 설계변경하여 재계약을 의뢰하고자 합니다.

따로붙임 1. 설계변경 심의 결과서      1부.

2. 심의 결정된 변경 설계서   1부.

3. 제비율 검증              1부.    끝.