문서번호	시설관리과-27084
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
박홍	김근용	이자원	12/15 이상래
협 조

강서구청사거리~등촌역 배수관 정비공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2015. 12

강서수도사업소

강서구청사거리~등촌역 배수관 정비공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

강서구청사거리~등촌역 배수관 정비공사에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련공문 : 시설관리과-26963(2015.12.14.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강서구청사거리 ~ 등촌역 배수관 정비공사

○ 위    치 : 강서구 화곡동 1108 ~ 등촌동 648-10

○ 규    모 : D100~D700㎜, L=1,096m 강관용접 및 주철관 접합시공(야간)

○ 기    간 : 2015. 5. 1.~ 2015.12.22.

○ 총공사비 : 2,000백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
2,000,000	763,476	646,729	461,571	낙찰률 86.75% (128,224천원)

○ 시 공 사 : 일월건설(주) – 현장대리인 최종남

○ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 서홍석

○ 공 정 률 : 100%(D700㎜, L=1,061m)

완료구간

사업구간

D700㎜, L=1,061m

□ 예산과목

○ 구축물, 노후상수도관(송배수관정비), 시설비및부대비(시설비)

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일   시 : 2015.12.14.(월) 16:00

○ 장   소 : 사업소 4층 회의실

○ 내   용 : 설계변경 타당성 등 검토

○ 심의위원

- 심의위원장 : 시설관리과장

- 심의위원 : 급수운영과 시설6급 유명은, 시설6급 김용호                             시설관리과 시설6급 김근용, 시설6급 손종백

- 간   사 : 시설7급 박 홍

○ 심의결과 : ‘적정’

- 계약변경 및 제경비산정 적정

- 공종별 증 · 감량 적용 적정

- 공종별 단가 적용 적정

□ 행정사항

○ 설계변경 시행 후 본청 재무과에 변경계약 의뢰

붙임 : 1. 설계변경 계획서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경도면 1부.

4. 설계변경심의결과서 1부.

5. 공사현장 실정검토보고서 1부(zip).  끝.