문서번호	기전과-13351
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
호정오		김호성	12/15 배광환
협조
	주무관		윤석주

2015년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

준 공 기 한 연 기 검 토 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서부도로사업소

(기    전    과)

2015년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

준 공 기 한 연 기 검 토 보 고

2015년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 업무 수행 중에 감리업체가 제출한 준공기한 연기요청 건에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 책임감리 준공기한 연기요청(협우지여 제15-신호기90호, ‘15.12.11)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 3개소(중구 충무로역․한국양봉농협 앞, 마포구 대흥동 3-108 앞)

○ 공사내용 : 신호기 신설 3개소 및 이설 1개소

○ 계약금액 : 141,425,190원

○ 공사기간 : 2015.10.5. ∼ 2015.12.21.

○ 계약업체 : ㈜신한네오텍 대표 강미순

□ 준공기한 연기내용

○ 연기내용 : 당초 2015.12.21일에서 2016년 6월 30일까지 연기

○ 연기사유 : 마포구 대흥동 3-108 앞 예산이 도로굴착 심의기간(상하반기 : 1월, 7월) 이후에 재배정(2015.9.10)되어 굴착 미승인으로 연기

□ 조치의견

○ 준공기한 연기요청한 감리업체 내용이 타당하므로 재무과로 준공기한을      연기의뢰하여 변경계약을 시행하고자 함

붙임 : 책임감리 준공기한 연기요청 1부.  끝.