투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	건설폐기물처리용역 설계변경 계약의뢰(강남순환도로4공구)

“ 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 건설폐기물처리용역” 시행중 토목공사 물량변경에 따라 설계변경(전체4회, 5차2회)사항이 발생하여 계약변경의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설페기물처리용역

나. 용역규모 : 폐콘크리트 29,744톤, 폐아스콘 9,140톤, 혼합폐기물 5,854톤

다. 용역기간 : 전체 ‘10.3.8~‘16.5.31 (5차2회 ‘15.3.1~‘15.12.31)

라. 계 약 자 : ㈜방태

마. 설계변경 계약금액(변경)                                (단위 : 원)

구 분		당초	변경	비고
용역비	전체(4회)	1,211,630,000	1,436,270,000	증)224,640,000
	금회(5차2회)	250,000,000	347,100,00	증)971000,000

바. 설계변경사유 : 건설공사 구간 지중의 폐기물 추가발생에 따름.

	토목부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/16 代서관석
협조자	주무관	시희식
시행	토목부-27055	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(7)